투융자심사 대상사업

별지4

(단위: 백만원, %)

사업명	총사업비	2012년까지 집행사업비	2013년 소요사업비	2014년 이후사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지진척율(%)
장림포구 명소화 사업	6,500	200	1,000	5,300	2015년	2012년	35
구청사 증축공사	3,000	-	129	2,871	2015년	2013년	40
다대청소년 문화의집 건립	4,173	-	318	3,855	2014년	2012년	100
괴정역사공원 조성사업	2,600	2,600	-	-	2014년	2011년	70
친환경스카이웨이 주차장건설	2,693	1,996	685	-	2014년	2011년	100
감천2동 공영주차장건설	2,330	1,093	1,234	-	2013년	2012년	100
괴정3동원광연립~ 동주대학간도로개설	4,800	1,000	500	3,300	2015년 이후	2010	35
괴정2동 대티로~ 193번지간 도로개설	4,500	4,000	500	-	2013년	2010년	100
괴정3동삼경맨션~ 448-31번지간도로 개설	2,500	1,000	700	800	2014년 이후	2011년	70
하단오거리주변 젊음의거리조성사업	5,000	2,734	760	1,506	2015년	2011년	87
천마산산복도로~감천사거리간도로개설	3,500	950	-	2,550	2014년 이후	2012년	20
장림금창수산~CJ 부산공장도로개설	4,500	-	2,500	2,000	2014넌	2013년	70
장림유수지 비점오염 저감사업	17,594	10,739	6,855	-	2014년	2009년	100
sunset 수변.휴게공간조성	3,179	80	99	3,000	2015년	2012년	5
감천문화마을분류식 하수관로 신설	7,733	-	-	7,733	2017년	2013년	5

★ 개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명

장림포구 명소화 사업

담당자

창조도시기획단

정영주(☎220-5924)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역적 정체성이 상실되어 있는 장림포구를 환경적, 창조적 공간으로

정비하여 환경개선 및 관광자원화를 통한 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012년 ～ 2015년(4년간)

○ 위 치 : 사하구 장림동 1092번지 일원

○ 규 모 : L=650m, B=100m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,500백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	6,500	60	621	2,289	3,530
국 비	3,250	60	621	1,019	1,550
시 도 비	2,600	0	0	800	1,800
시군구비	650	0	0	470	180
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ 2012.  8월 : 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2013. 11월 : 포구준설공사 착공

○ 2013. 12월 : 기본 및 실시설계용역 완료

○ 2014.  4월 : 일반해역이용협의 용역 착수

○ 2014.  5월 : 일반해역이용협의 완료

○ 2014.  6월 : 공유수면 점용․사용 변경승인 신청(구→부산지방해양항만청)

○ 2014.  7월 : 포구준설공사 준공

□ 향후계획

○ 2014.  7월 : 포구준설공사 준공

○ 2014.  8월 : 포구정비공사 착공

○ 2015. 12월 : 포구정비공사 준공

사업명

구청사 증축공사

담당자

재무과

박미혜(☎220-4152)

□ 사업목적 및 필요성

○ CCTV 관제센터 구축 및 사무실 공간부족 해소

○ 정부시책 다변화로 점점 늘어나는 행정수요에 대처

○ 쾌적한 근무환경 조성 및 구민 편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2015년

○ 위 치 : 당리동 317-16번지외 1필지

○ 규 모 : 지상 4층, 연면적 1,165㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	3,000			3,000
국 비
시 도 비	1,500			1,500
시군구비	1,500			1,500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2013.  12월 : 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2013.  12월 : 착수보고회(참석▹아키신화 대표외 3명, 구 감독공무원)

○ 2014.  1월~3월  : 창의회의 및 추진상황보고회 ▹ 3회

○ 2014.  3월~4월  : 직원의견 수렴▹주무계장 회의(3.26) 및 의견수렴 등

○ 2014.  4월 : 주차장 확보방안 검토▹외부주차장 임대 등

○ 2014.  5월 : 증축공사 설계변경 용역(사무실 리모델링 포함)

○ 2014.  6월 : 도시디자인위원회 심의▹조건부 동의

□ 향후계획

○ 2014.  8월 : 공사 추진계획 수립

○ 2014.  9월 : 공사 착공 ▹ ’15.  6월 공사 준공예정

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 증축동 사무실 재배치안 검토(리모델링 포함) 및 市 설계심의기간 등으로 당초 계획상의 추진일정 변경이 필요

▹ 준공시기 조정 : 2014. 12월 → 2015. 6월

사업명

다대 청소년 문화의 집 건립

담당자

복지정책과

최정원(☎220-5791)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역사회 차원의 청소년 활동․복지․보호체계 구축 및 청소년의 건전한        성장과 복지 증진을 위한 문화의 집 건립

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 6월 ~  2014. 6월

○ 위 치 : 사하구 다대로 716-1(다대동)

○ 규 모 : 부지 1,144㎡, 건물 1,354㎡(지하1층, 지상4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,173백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	4,173		318	2,452	1,403
국 비	1,056		30	1,026	-
시 도 비	204		4	200	-
시군구비	2,913		284	1,226	1,403
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2012. 06월 : 청소년문화의 집 건립계획 수립

○ 2013. 11. 19. : 공사 착공

○ 2014. 06. 27. : 준공 완료

□ 향후계획

○ 2014. 07월 : 인테리어 및 비품 구입

○ 2014. 07. 30. : 개관

□ 사업변경 내역(해당시)

구분	당초	변경	비고
총사업비	3,730백만원	4,173백만원
사업기간	‘13.11.19.~’14.04.02	‘13.11.19~’14.06.13.

사업명

괴정역사공원 조성사업

담당자

산림녹지과

이정주(☎220-4542)

□ 사업목적 및 필요성

○ 괴정재정비촉진지구 지정 해제에 따른 지역 내 주민 상실감 해소와 지속적인 기반시설 확충 및 주거환경 개선

○ 수령 600년의 보호수와 아래로 흐르는 샘물 및 빨래터 등 역사적 자원 보존 및 활용

○ 녹지가 부족한 구도심에 역사적 테마가 있는 공원 조성을 통해 쾌적한 주민 휴식 공간 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012년 ~ 2013년

○ 위 치 : 사하구 괴정동 1244-5번지 일원

○ 규 모 : A=2,113㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,800백만원                                  (단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	3,800		2,600	800	400
국 비	400			400
시 도 비	3,400		2,600	400	400
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2012. 6월 : 추진계획 수립

○ 2013. 1월 : 괴정회화나무공원 조성계획 결정 및 지형도면 고시

○ 2013. 02. 27 : 괴정회화나무공원 실시계획 고시

○ 2013.  9월 : 도시관리계획변경 용역 착공

○ 2014.  5월 : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2014. 11월 : 공사준공

□ 사업변경 내역(해당시)

구분	당초	변경	비고
사업규모	A=2,113㎡	A=2,290㎡
총사업비	2,600백만원	3,400백만원	2014년 800백만원 추가 확보 및 시행
사업기간	2012년~2013년	2012년~2014년

사업명

친환경스카이웨이 주차장 건설

담당자

교통행정과

장민교 (☎220-4555)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도심을 조망할 수 있는 고지대 노후 주택 밀집지역에 노외공영주차장,

주민휴식공원 및 전망대를 조성함으로써 주차난 해소, 주거환경개선 및

관광자원 효과 기대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 1. ~ 2013. 9.

○ 위 치 : 괴정동 378-57번지 일원 2274㎡

○ 규 모 : 주차장 48면(지평식), 주민휴식공원 및 전망대

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,693백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	2,693	1,996	697
국 비
시 도 비	1,550	896	654
시군구비	1,143	1,100	43
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2012. 11월. : 도시계획 결정, 보상, 실시설계 완료

○ 2013. 1월. ~ 9월. : 공사 착․준공

□ 향후계획 : 공영주차장 민간위탁 운영(계속)

□ 사업변경 내역

구분	당초	변경	비고
총사업비	2,650백만원	2,681백만원
사업기간	2012년~2013년	2012년~2014년

※ 2012. 12. 주민휴식공원 보강공사에 따른 추가 공사비 43백만원 증액

사업명

감천2동 공영주차장 건설

담당자

교통행정과

장민교(☎220-4555)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주차난이 심각한 고지대 노후 주택 밀집지역에 노외공영주차장 및 주민

체육시설을 설치함으로써 주차난 해소 및 주거환경개선 효과 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012. 1. ~ 2014. 2.

○ 위 치 : 감천동 16-485번지 일원 841㎡

○ 규 모 : 주차장 50면(2층2단 철골) 및 주민체육시설

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,330백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	2,330	1,093	1,237
국 비
시 도 비	998	998
시군구비	1,332	95	1,237
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2012. 7월. : 도시관리계획시설(주차장) 결정

○ 2012. 9월. : 실시설계 완료

○ 2013. 4월. : 토지 및 지장물 보상 완료

○ 2013. 5월. ~ 2014. 2월. : 공사 착․준공

□ 향후계획 : 공영주차장 민간위탁 운영(계속)

□ 사업변경 내역 : 없음

사업명

괴정3동원광연립~동주대학간도로개설

담당자

건설과

김영근(☎220-4694)

□ 사업목적 및 필요성

○ 소방도로 확보로 생활불편해소 및 지역균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010년 ~ 2015년 이후

○ 위 치 : 사하구 괴정동 동주대학 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=290m, B=12m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,800백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	4,800	1,000	500	1,000	2,300
국 비
시 도 비	500		500	1,000	2,300
시군구비	4,300	1,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ 2010. 7월 : 실시설계용역 착수

○ 2011. 3월 : 실시설계용역 준공

○ 2011. 5월 : 1차 공사착공(L=120m, B=12m)

○ 2012. 2월 : 1차 공사준공

○ 2013. 3~9월 : 2차구간 보상완료(토지2필지, 건물3동)

□ 향후계획

○ ‘14. 7~12월 : 보상절차이행

○ ‘14. 10 : 공사착공(L=70m)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음

사업명

괴정2동 대티로~193번지간 도로개설

담당자

건설과

박성석(☎220-4691)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고지대 주택가 밀집지역 주민통행불편 해소 및 소방도로 확보

○ 고지대 도시기반시설 조성으로 지역간 균형발전 도모

□ 사업개요(투자심사 당시 기준)

○ 기간 : 2004년 ～ 2013년

○ 위치 : 사하구 괴정2동 대티로～193번지간

○ 시공사 : (주)대아종합조경

○ 사업규모 : 도로개설 L=345m,   B=6m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,494백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	4,494	4,017	477
국 비
시 도 비	1,500	1,081	419
시군구비	2,994	2,936	58
지 방 채
민간자본
기 타

○ 총사업비 : 4,494백만원(시도비 1,500, 시군구비 2,994)

○ 지금까지 집행액 : 4,494백만원

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2013. 6월 : 공사완료

□ 향후계획

○ 집행잔액으로 도로 법면부 정비 등 주변지역 정비

사업명

괴정3동 삼경맨션~448-31번지간 도로개설

담당자

건설과

김영근(☎220-4694)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로개설중 중단된 사업장으로 인근 주민들의 교통불편 해소를 위해

조기개설 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010년 ~ 2015년 이후

○ 위 치 : 괴정3동 삼경맨션 ~ 1238-299번지간 도로개설

○ 규 모 : 도로개설 L=260m, B=6m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	2,500	1000	-	700	800
국 비
시 도 비	1,800	700
시군구비	700	300		700
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2013. 10월 : 지장물 조사 및 실시계획 고시

○ 2013. 12월 : 공사 발주

○ 2014.  1월 ~ 4월 : 보상 협의

○ 2014.  2월 : 공사 착공(공사중지 : 2014.2.13)

□ 향후계획

○ 2014. 12월 : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음

사업명

하단오거리 주변 젊음의 거리조성

담당자

건설과

박석규 (☎220-4692)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동아대학교 하단캠퍼스와 연계하여 하단오거리 주변에 젊음의 거리를          조성하여 역동적인 도시공간 조성

○ 새로운 이미지의 도시공간 창출로 주민생활환경 개선 및 지역상권 활성화

□ 사업개요

○ 기  간 : 2011 ~ 2015년

○ 위  치 : 하단동 동아대학교 ～ 에덴공원 ～ 하단오거리 ～ 65호광장

○ 규  모 : 시범가로 조성 L=2,469m  B=8～12m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황 (총사업비 투자심사 당시 기준)

○ 총사업비 : 5,000백만원(국비 2,500, 시도비 1,250, 시군구비 1,250)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	5,000	1,756	974	1,535	735
국 비	2,500	924	487	768	321
시 도 비	1,250	382	244	384	240
시군구비	1,250	450	243	383	174
지 방 채
민간자본
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 87%)

○ 2011. 5월 : 기본(전체)및실시설계(1단계-하단오거리) 용역착수 ▻‘12.3.14준공

○ 2012. 2월 : 부산시 도시디자인 심의완료

○ 2012. 3월 :  2단계 구간(동아대 입구) 용역착수  ▻‘12.11.19 준공

○ 2012. 4월 : 1단계 구간(하단오거리 주변) 공사착공 ▻‘12.11.30 준공

○ 2013. 3월 : 2단계 구간(동아대 입구) 공사착공     ▻‘13.11.22 준공

○ 2013. 5월 : 3단계 구간(에덴공원 주변) 용역착수 ▻‘14.04.07 준공

○ 2014. 4월 : 3단계(에덴공원 주변) 1차구간 공사착공(L=1,138m)

▻‘14. 7월 현재 공정 28%

□ 향후계획

○ 2014. 10월 : 3단계(에덴공원 주변) 1차구간 공사준공

○ 2015. 2월~10월 : 3단계(에덴공원 주변) 2차구간 공사시행(L=331m)

□ 사업변경 내역(해당시) -

○ 해당사항 없음

사업명

천마산산복도로~감천사거리간 도로개설

담당자

건설과

김태완(☎220-4704)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고지대 주택밀집 지역으로 소방도로를 확보하여 주민불편사항 해소 및        도시 균형 발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2012년 ~ 2015년 이후

○ 위 치 : 사하구 감천동 28-2번지 ~ 감천동 471번지

○ 규 모 : 도로개설 L=358m, B=6m~8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	3,500	950		400	2,150
국 비
시 도 비	3,500	950		400	2,150
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ 2014. 3월 : 1차공사(‘12년 예산사업) 준공

○ 2014. 3월 : 2차공사(‘14년 예산사업) 착공

▷ 공사일시정지 : 2014.3.14(사유: 보상협의 지연)

○ 2014. 5월 : 보상완료(건물4동, 토지 191㎡)

○ 2014. 6월 : 이주독려

□ 향후계획

○ 2014. 8월 : 공사재개

○ 2014. 12월 : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음

사업명

장림 금창수산~CJ 부산공장간 도로개설

담당자

건설과

김영근(☎220-4694)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장림지구 상습침수지 해소와 장림로 잔여구간 개설로 지하철 우회도로        확보 및 슬럼화 된 지역개발로 쾌적한 도시환경을 조성코자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013년 ~ 2015년

○ 위 치 : 장림1동 금창수산～CJ부산 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=200m, B=20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,500백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	4,500		40	4,460
국 비
시 도 비	3,500		9	3,491
시군구비	1,000		31	969
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2013. 8월 : 실시설계용역 착수

○ 2013. 9월 : 지장물건 조사 보고

○ 2013. 11월 : 실시설계용역 완료

○ 2014. 2월 : 공사착공   ※ 공사중지 : 2014.2.20

□ 향후계획

○ 2014.  7월 : 공사재개

○ 2014. 12월 : 공사완료

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음

사업명

장림유수지 비점오염저감사업

담당자

도시정비과

김회집(☎220-4684)

□ 사업목적 및 필요성

○ 유수지 본연의 홍수시 방재기능 유지는 물론 유수지로 유입되는 도시지역       비점오염 물질 저감 및 생태유수지를 조성하여 수질개선, 도심내 쾌적한       생태환경 조성과 주민 생활환경 개선 및 휴식공간 제공

□ 사업개요

○ 기간 : 2010년~2014년  ○ 위치 : 사하구 장림동 유수지 일원

○ 시공사 : -             ○ 사업규모 : 지하저류조 V=13,800㎥

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 17,594백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	17,594	10,739	6,855
국 비	8,797	7,588	1,209
시 도 비	8,797	3,151	5,646
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2010. 6월 : 기본 및 실시설계 용역 착수

○ 2011. 6월 : 기본 및 실시설계용역 준공

○ 2011. 8월 : 공사 착공

○ 2012. 8월 : 1차공사 준공(도수로 L=600m, 저류조 터파기 V=15,000㎥)

○ 2013. 1월 : 지하저류조 구조물 설치완료(13,800㎥)

○ 2013. 5월 : 도수로 설치완료(L=772m)

○ 2014. 5월 : 전체공사 준공

□ 사업변경 내역

구분	당초	변경	비고
총사업비	20,200백만원	17,594백만원

사업명

Sunset 수변․휴게공간 조성

담당자

도시정비과

최우영(☎220-4724)

□ 사업목적 및 필요성

○ 을숙도와 낙동강 연안의 생태축과, 인근의 홍티아트센터, 아미산전망대와

연계한 강동권 생태문화관광벨트 구축

○ 강, 바다, 노을이 어우러진 천혜의 자연 경관을 감상하며 쉴 수 있도록 접근성이

용이한 강변대로 물양장에 생태문화·휴게공간 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2011년 ~ 2015년(5년간)

○ 위 치 : 사하구 다대동 1525-1번지

○ 규 모 : 생태문화 휴게공간 조성 A=2,831㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,191백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	3,191	65	72	3,054
국 비	1,500			1,500
시 도 비	1,500			1,500
시군구비	191	65	72	54
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  5%)

○ 2013.  9월 : 건축설계공모 완료 및 실시설계 착수

○ 2013. 11월 : 문화재현상변경 1차 심의

○ 2013. 12월 : ‘14년도 환경부 국고보조금 예산 가내시(국비15, 지방비15)

○ 2013. 12월 : 실시설계 용역중지(12.9)

○ 2014.  2월 : 문화재현상변경 2차 심의

○ 2014.  5월 : 문화재청 방문협의 ▷ 건축대안 설명

○ 2014.  6월 : 문화재청 현장방문

○ 2014.  7월 : 문화재청 방문협의 ▷ 사업추진방향협의

□ 향후계획

○ 2014. 8월 : 조경계획 보완 및 사업추진방향 협의

○ 2014. 9월 : 문화재현상변경, 공유재산 등 관련기관(부서)허가·협의추진

○ 2014. 11월 : 실시계획인가 및 실시설계용역 완료

○ 2014. 12월 : 공사착공 ▷ 2015. 12월 공사준공

사업명

감천문화마을 분류식 하수관로 설치공사

담당자

시설7급 김회집(☎220-4684)

□ 사업목적 및 필요성

○ 감천문화마을의 분류식 하수관로 설치로 주민생활환경 개선

○ 인근 해역으로 유입되고 있는 하수를 차집하여 강변하수처리장으로 이송       지역연안 수질개선 및 강변공공하수처리장 처리효율 증진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2017년(4년간)

○ 위 치 : 사하구 감천문화마을 일원

○ 규 모 : 오수관거(D200~450㎜) L=5.129㎞, 배수설비 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,733백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘13연도	‘14연도	‘15연도 이후
계	7.733			500	7,233
국 비	3,866			250	3,616
시 도 비	3,867			250	3,617
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  5%)

○ 2013.  5월 : 2014년 도시활력증진지역개발사업 신규사업 제안

○ 2013.  7월 : 투․융자심사

○ 2013. 12월 : 기본 및 실시설계용역비(500백만원) 편성

○ 2014.  1월 : 계약심사 완료(시 감사담당관)

○ 2014.  2월 : 기술용역발주계획 심의 완료(시 기술관리과)

○ 2014.  4월 : 용역 사업수행능력평가 완료

○ 2014.  4월 : 용역 착수

○ 2014.  7월 : 현장 측량 및 배수설비 조사

□ 향후계획

○ 2015.  4월 : 실시설계용역 준공

○ 2015.  5월 : 공사 착공

○ 2017. 12월 : 공사 준공