	《추진배경 혹은 목적 》
❍ 산복도로르네상스 감천1동 지역 중앙에 위치하여 접근성이 좋은 곳에 주민이 소통할 수 있는 거점공간을 조성하여 아동교육 및 주민공동체 회복을 위한 의식교육 실시등 마을 주민들의 참여유도와 주민역량 강화로 마을만들기의 자생력을 도모하기 위함

감천1동「감내골다모아센터」개관

▣ 사업개요

❍ 위    치 : 감천로139번길 37(감천1동 31-31번지)

❍ 사업기간 : 2012년 ~ 2013년

❍ 총사업비 : 3억원(시비)

❍ 사업내용 : 기존 주택 리모델링 ▷ 토지 149㎡, 건물 129.95㎡(지상 2층)

구 분	면적(㎡)	구 성	비 고
1층	84.71	공부방, 미니도서관
2층	45.24	사랑방, 공동작업장

▣ 추진상황

□ 2012. 1 ~ 5월 : 마을만들기 사업 종류 조사 및 주민협의

□ 2012. 5. 15 : 주민소통 거점센터 조성(안) 결정

□ 2012. 9. 27 : 시조정위원회 공유재산 취득 심의 의결

□ 2012. 7. 24 : 대상부지 및 건물매입 계약 ▶ 소유권 이전완료(9.3)

□ 2012. 9. 25 : 실시설계 용역(부산시 창조도시기획과)

□ 2012. 12. 7 : 공사 착공

□ 2013. 3. 21 : 공사 준공

□ 2013. 5. 10 : 명칭제정(감천1동 다목적거점센터→감내골 다모아센터)

□ 2013. 9. 5 : 센터 개관

▣ 기대효과

❍ 주민과 학생 등 주민들의 학습 프로그램과 독서와 자기계발 공간

❍ 소득창출을 위한 주민 공동작업장과 각종 의사결정을위한 회의장소 활용

□ 사업명 : 감내골 다모아센터 개관

≪ 위 치 도 ≫

≪ 현 장 사 진 ≫