다대어업인 복지회관 개관

	《추진배경 혹은 목적 》
❍ 어업인소득증대 및 지속가능한 어업생산체계 구축을 목적으로 추진중인 자율관리어업육성사업 사업자로 선정되어 다대어업인복지회관 건립

▣ 사업개요

❍ 위    치 : 부산시 사하구 다대동로8번길 101(다대동)

❍ 사업기간 : 2012.7～2013.7

❍ 총사업비 : 2억원(국비 1, 시비 0.4, 구비 0.4, 자담 0.2)

- 지원율 : 국비50%, 시비20%, 구비 20% 자담10%

❍ 사업내용 : 다대 어업인복지회관 건립

- 지상3층, 대지면적 238㎡, 건축연면적 384.74㎡

- 건축면적 : 1․2층 138.25㎡, 3층 108.24㎡, 구조 : 철근콘크리트

▣ 추진상황

❍ ‘11.12.29 : '12년 자율관리어업육성사업 지원대상 공동체 확정

❍ ‘12.06.29 : 자율관리어업육성사업 구예산(40백) 추경 확보

❍ ‘12.09.11～11.20 : 설계용역 계약 및 건축설계 완료

❍ ‘12.12.28 : 공사계약 체결, 공사기간 : ’13.1.7～4.6(90일)

❍ ‘13.04.23 : 공사완료(4.6) 및 건축물 사용승인

❍ ‘13.07.31 : 다대어업인복지회관 준공식 개최

▣ 기대효과

❍ 수산물 어획, 판매, 유통 등 어업인간의 정보교류 활성화

❍ 행정업무 활용으로 어업인 편의제공 및 소득증대 기여

□ 사업명 : 다대어업인복지회관 건립

≪ 위 치 도 ≫

≪ 현 장 사 진 ≫