11

주요 투자사업 추진현황

11-1. 투융자심사 대상사업

▣ 우리 사하구에서 ‘14년에 추진한 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2013년까지 집행사업비	2014년 소요사업비	2015년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지진척율(%)
장림포구명소화사업	6,500	1,750	1,400	3,350	2016	2012	50
감천문화마을분류식하수관거신설	7,733	-	500	7,233	2017	2013	10
서부산권 장애인 스포츠센터 건립	11,400	-	-	11,400	2017	2014	15
구청사 증축	3,000	-	129	2,871	2015	2013	90
괴정역사공원 조성사업	3,400	2,600	800	-	2015	2011	100
감천2동 공영주차장 건설	2,330	2,330	-	-	2014	2012	100
괴정재정비촉진해제지역공영주차장	2,501	-	2,501	-	2015	2013	100
괴정3동원관연립~ 동주대학간도로개설	4,800	1,500	1,000	2,300	2016	2010	60
괴정3동삼경맨션~ 448-31번지간 도로개설	2,500	1,000	700	800	2016	2011	65
하단오거리주변 젊음의거리조성사업	5,000	3,494	864	642	2016	2011	-
장림금창수산~ CJ부산공장간 도로개설	4,500	2,500	2,000	-	2015	2013	100
감천2동감전초교 일원 천마산 산복도로개설	6,800	-	1,000	5,800	2018	2014	30
천마산산복도로~ 감천사거리간 도로개설	3,500	950	400	2,150	2016	2012	41
SUNSET 수변휴게공간조성	1,689	189	750	750	2016	2012	10

‣ 총사업비 내 ( ) : 최종 변경된 총사업비

◈ 개별 투융자심사사업 추진현황 [별지4]

11-2. 지방채 발행사업

▣ 우리 사하구에서 ‘14년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
		해	당	없	음

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2014년에 추진한 사업

11-3. 민간투자사업

▣ 우리 사하구에서 현재 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				’13년까지 부담액	’14년 부담액	’15년 이후 부담 예정액
BTL	다대도서관 건립	화명다대 도서관(주)	20,891	3,692	923	16,276	20년 (2010~2030)

▸총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

▸재정부담액 : (임대료+운영비)

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2014년까지는 집행액(결산기준),

2015년 이후는 추정액

▸재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

★ 개별 민간투자사업 현황

사업명

다대도서관 건립

담당자

다대도서관 김경수(☎220-5862)

□ 사업목적 및 필요성

○ 문화시설 확충으로 평생학습교육 증진과 문화적 활동공간 제공

□ 사업개요

○ 공사기간 : 2009.1.1~2010.1.31 (운영기간: 2010년~2030년)

○ 위    치 : 부산광역시 사하구 다대낙조2길 9

○ 민간사업자 : 화명다대도서관(주)

○ 총사업비 : 20,891백만원

○ 사업규모 : 부지 1,657㎡, 연면적 3,521㎡(지하1층, 지상5층)

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

- 건립(관리)비용 20년 균등 상환(2010년~2030년)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위: 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	20,891	3,692	923	946	15,330
국 비	3,031	602	144	145	2,140
시 도 비	3,534	703	169	169	2,493
시군구비	14,326	2,387	610	632	10,697
기 타

□ 추진단계

○ 운영중

□ 향후계획

○ 이용인원 확대 : 400,000명 목표(일일 1,300명) ▷ 작년대비 20,000명 증가(예상)    ○ 장서수 확대 : 83,531권 목표 ▷ 작년대비 10,000권 증가(예상)

○ 책 읽는 사하 만들기 운동 전개

- 독서환경 개선 : 도서 통합대출·반납서비스 운영, 도서택배 무료서비스 운영,                        장애인 정보누리터 설치, 비도서자료(DVD) 대출 운영

- 독서진흥사업 추진 : 도서관 주간행사, 독서의 달 행사

- 문화강좌 활성화 : 독서문화, 외국어, 정보화, 방학특강, 토요학교 등

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음