특수공시

□ 회화나무 샘터공원 조성

□ 두송 생활문화센터 개관

□ 오페라 공연 및 제작

□ 당리 작은도서관 개관

□ 사하구 청소년문화의 집 개관

□ 다대포 해변공원 관리센터 준공

□ 장림포구 명소화 사업(포구준설 및 정비)

□ 다대포해수욕장~몰운대입구 테마거리 조성

□ 괴정3동 원광연립~동주대학간 도로개설

□ 괴정재정비촉진 해제지역 보행자도로 조성

□ 하단오거리 젊음의 거리 조성사업

□ 회화나무 공영주차장 조성

□ 감천문화마을 주차장 조성

회화나무 샘터공원 조성

	《추진배경 혹은 목적》
❍ 괴정동 1244-5번지 일원 ‘괴정동’ 지명의 유래가 된 수령 650년 이상의 회화나무 보호수와 통샘 및 빨래터(큰새미걸)를 향토사적 테마가 있는 공간으로 조성

▣ 사업개요

❍ 위    치 : 사하구 괴정동 1244-5번지 일원

❍ 사업기간 : 2014 ~ 2015년

❍ 총사업비 : 34억원(도시재생사업 26억, 도시숲조성사업 8억)

❍ 사업내용 : 소공원 조성 및 빨래터 일원 미관개선사업 1식(2,230㎡)

▣ 추진상황

❍ 2014. 02. 20 : 실시설계용역 준공

❍ 2014. 05. 27 : 공사 착공

❍ 2014. 07. 03 : 괴정동회화나무공원 주민설명회 개최

❍ 2014. 11. 12 : 도시계획시설(괴정회화나무공원)조성계획(변경)결정 및 지형도면 고시

❍ 2014. 11. 12 : 괴정회화나무공원실시계획변경 고시

❍ 2014. 11. 24 : 괴정회화나무공원 조성공사 설계변경

❍ 2015. 02. 13 : 조성공사 준공

▣ 기대효과

❍ 도심지 개발로 훼손 위기에 있는 역사적 공간의 보존 및 구도심에 부족한 녹지 및 주민 휴식 공간 확충

□ 사업명 : 괴정회화나무공원 조성사업

≪ 위 치 도 ≫

≪ 현 장 사 진 ≫

두송생활문화센터 개관

	《추진배경 혹은 목적》
❍ 유휴시설인 옛 목욕탕 건물을 리모델링하여 주민들이 자유롭게 문화 활동을 할 수 있는 복합문화공간인 두송생활문화센터를 조성

▣ 사업개요

❍ 위    치 : 사하구 다송로 59(다대2동 96-1번지) ▷ 다대4지구 상가

❍ 조성기간 : 2014년 ~ 2015년 5월

❍ 사 업 비 : 8.7억원 (국비 2.6 시비 2.6 구비 3.5)

❍ 사업내용: 유휴시설을 지역주민의 문화예술활동 공간으로 조성

▣ 추진상황

❍ 2015. 1월  : 철거공사 (2014. 12. 29 착공)

❍ 2015. 4. 1 : 시간선택제임기제 직원 채용

❍ 2015. 4월  : 명칭공모 (두송생활문화센터)

❍ 2015. 5. 7 : 조성공사 준공

❍ 2015. 5.11 : 두송생활문화센터 관리·운영 기본계획 수립.

❍ 2015. 5.13 : 두송생활문화센터 운영조례 제정

❍ 2015. 5.29 : 개관식 및 운영

▣ 기대효과

❍ 지역 내 유휴시설을 활용한 복합문화공간을 조성하여, 주민들의 문화예술 활동을 장려하고,

❍ 나아가 지역의 문화적 가치와 삶의 질 향상에 기여함

□ 사업명 : 두송생활문화센터 개관

≪ 위 치 도 ≫

≪ 현 장 사 진 ≫

오페라 공연 및 제작

	《추진배경 혹은 목적》
❍ 공공 문화예술회관으로서의 역할과 사명 - 지역의 우수한 신인 발굴과 인재 양성 및 대규모 공연을 진행하는 기술 인력의 역량 개발 ❍ 지역문화 거점으로서의 역할에 충실 - 좋은 오페라를 제작하여 주민들에게 저렴하게 소개하여 많은 주민이 문화예술을 향유할 수 있는 기회 마련

▣ 사업개요

❍ 공연기간 : 2014년 7월23~24일

❍ 총사업비 : 1.1억원

❍ 사업내용 : 오케스트라, 합창단, 무용단과 성악가 및 스텝 등 200여명                  의 전문가들이 만들어내는 종합예술

▣ 추진상황

❍ 부산일보 5단 통광고 7회, 기사 보도 3회

❍ KBS TV 무대와 객석 촬영, KBS 뉴스광장(7.26,금) 방송

❍ 바다 TV : 7월중 방송 및 한국문화예술위원회 웹진

❍ 국제신문 기사보도 : 1회 (부산가정법원 청소년 관람)

❍ DVD 제작 배포(예술단체, 부산문화재단 포함 전국 문화회관 등)

▣ 기대효과

❍ 을숙도문화회관의 대외적 홍보효과 및 인지도 향상

- 부산일보 5단 통광고 7회, 기사 보도 3회

- 국제신문 기사보도 : 1회 (부산가정법원 청소년 관람)

- KBS TV 무대와 객석 촬영, KBS 뉴스광장(7.26,금) 방송

- 바다 TV : 7월중 방송, 한국문화예술위원회 웹진

□ 사업명 : 2014년 오페라 투란도트

≪ 공연사진 ≫

당리 작은도서관 개관

	《추진배경 혹은 목적》
❍ 주민들이 가까운 곳에서 손쉽게 독서문화 서비스를 제공 받을 수 있는 생활밀착형 도서관 문화를 형성하기 위함

▣ 사업개요

❍ 위    치 : 사하구 승학로20번길 25 (당리동 307-43번지)

❍ 사업기간 : 2014년 1월 ~ 8월

❍ 사 업 비 : 8.2억원(국0.7 시6.5 구1)

❍ 사업내용 : 지역주민에게 지식정보 접근성 보장 및 문화소통 공간조성

▣ 추진상황

❍ 2013. 12. 27 : 조성계획 수립

❍ 2014.  1.  2 : 대상지 매입

❍ 2014.  2. 20 : 주민설명회 개최

▻ 운영위원회 구성, 명칭선정(당리 작은도서관)

❍ 2014.  3. 14 : 설계용역 완료

❍ 2014.  4.  3 : 신축공사 착공

❍ 2014.  7. 26 : 신축공사 준공

❍ 2014.  8. 22 : 개관

▣ 기대효과

❍ 주민일상생활에서 쉽게 이용할 수 있는 생활밀착형 도서관 문화를

형성하고, 지역주민에게 지식정보 접근성 보장 및 문화소통 공간으로

활용

□ 사업명 : 당리 작은도서관 개관

≪ 위 치 도 ≫

≪ 현 장 사 진 ≫

사하구 청소년문화의 집 개관

	《추진배경 혹은 목적》
❍ 청소년의 올바른 정체성 확립 및 자아실현을 위한 청소년 관련 시설의 부재로 청소년 활동 지원 어려움 ❍ 활용가치가 없던 시설물을 매입 후 리모델링 및 증축을 통해 청소년과 지역 주민들이 다양하게 이용할 수 있는 공간을 제공함으로써 청소년의 정서함양 및 복지증진에 기여

▣ 사업개요

❍ 위    치 : 사하구 다대로 716-1(다대동)

❍ 사업기간 : 2012년 6월 ~ 2014년 7월

❍ 총사업비 : 41억원(국비 10, 시비 2, 구비 29)

❍ 사업내용 : 실내암벽등반실, 직업체험훈련실, 방과후교실, 다목적 강당, 음악실, 도서․인터넷카페, 프로그램실 등

▣ 추진상황

❍ 2012. 06월 : 건립계획 수립(최초) ▷ 광역․지역발전특별회계

❍ 2013. 02월 : 부지 및 건물 매입 완료 ▷ 2013. 2.5일 소유권이전

❍ 2013. 03월 ~ 08월 : 기본 및 실시설계 용역

❍ 2013. 09월 : 운영 조례 제정 ▷ 9. 16 공표

❍ 2013. 11월 : 공사 착공

❍ 2013. 12월 : 위탁 운영법인 선정 ▷ 재단법인 내원청소년단

❍ 2014. 06월 : 공사 준공검사 및 준공 완료

❍ 2014. 07월 : 개관

▣ 기대효과

❍ 청소년의 다양한 끼와 감성을 발산할 수 있는 공간 제공으로 다양한 여가활동 및 방과 후 돌봄 서비스 등 지원

❍ 청소년뿐만 아니라 인근 지역주민들이 편안하게 이용할 수 있는 휴식처로서의 기능 활용

□ 사업명 : 사하구 청소년문화의집 개관

≪ 위 치 도 ≫

≪ 현 장 사 진 ≫

다대포 해변공원 관리센터 준공

	《추진배경 혹은 목적》
❍ 다대포해수욕장 연안정비사업의 원활한 지원을 위하여 『다대포해수욕장 지원시설(종합관리센타) 건립공사』를 통하여 휴게·휴양기능을 갖춘 친수공간으로 쾌적한 도시 환경 조성 목적

▣ 시설개요

❍  소재지 : 사하구 몰운대1길 14(다대동 482-3)

❍ 구  조 : 철근콘크리트 구조

❍  규  모 : 지상 3층, 연면적 : 867.6㎡

❍  용  도 : 제1종 근린생활시설

▷ 임해행정봉사실, 중소기업홍보관, 유관기관사무실, 북카페 등

❍ 사업비  : 18.7억원

▣ 추진상황

❍ 2006. 05. ～ 2008. 04. : 기본 및 실시설계용역 완료

❍ 2013. 12. : 관리센터 실시설계 변경 용역 설계완료

❍ 2014. 01. : 건축공사 계약심사 완료

❍ 2014. 03. 26 : 공사 계약체결

▹ 주계약자 : 대림종합건설(주), 부계약자 : 형덕산업개발(주)

❍ 2014. 04. 01 : 공사 착수

❍ 2015. 01. 31 : 공사 완료

❍ 2015. 07. 01 : 관리센터 개소

▣ 기대효과

❍ 다대포 해수욕장 및 해변공원의 효율적인 관리를 위한 종합관리시설

❍ 다대포 해수욕장 및 해변공원 문화 공간 조성

❍ 1119수상구조대,여름파출소,122수상구조대등 안전요원의 정주공간 개선

□ 사업명 : 다대포 해변공원 관리센터 준공

≪ 위 치 도 ≫

≪ 현 장 사 진 ≫

장림포구 명소화사업 (포구준설 및 정비)

	《추진배경 혹은 목적》
❍ 거가대교 개통, 강변대로 확장공사 등으로 접근이 용이하고, 생태관광에 대한 인식변화로 다대포와 을숙도를 찾는 관광객이 증가함에 따라 지역적 정체성이 상실되어 있는 장림포구를 환경적, 창조적 공간으로 정비하여 환경개선 및 관광자원화를 통한 지역경제 활성화 도모

▣ 사업개요

❍ 위    치 : 장림동 1092번지 일원(장림포구) ▷ L = 650m, B = 100m

❍ 사업기간 : 2012년 ∼ 2016년

❍ 총사업비 : 65억원(국비 32.5, 시비 26, 구비 6.5)

❍ 사업내용

∙ 훼손된 어촌환경 개선, 포구기능 복원

- 포구준설, 수질개선, 가설 건축물 정비, 공동작업장 설치 등

∙ 휴게공간 확충으로 포구 방문 활성화 유도

- 산책로, 수변공원, 먹거리타운 조성 등

▣ 추진상황

❍ 2012.  8월 : 기본 및 실시설계용역 착수

❍ 2013. 11월 : 포구준설공사 착공

❍ 2013. 12월 : 기본 및 실시설계용역 완료

❍ 2014.  7월 : 포구준설공사 준공 (준설 V=54,461㎥, 1,911백만원)

❍ 2014.  9월 : 포구정비공사 착공

❍ 2015.  3월 : 포구정비공사(1차) 준공 및 포구정비공사(2차) 착공

▣ 기대효과

❍ 산업단지 조성 등으로 쇠퇴한 포구자체의 환경뿐만 아니라 낙동강 하       구와 다대포 해양관광 자원과의 시너지 효과를 기대할 수 있으며

❍ 훼손된 어촌 환경을 개선함과 동시에 산책로, 수변공원, 먹거리타운       등을 조성하여 외래방문객의 이용 활성화

□ 사업명 : 장림포구 명소화 사업

≪ 위 치 도 ≫

≪ 현 장 사 진 ≫

다대포해수욕장~몰운대입구 테마거리 조성

	《추진배경 혹은 목적》
❍ 다대포해수욕장 연안정비사업 완공시기와 연계하여 다대포해수욕장에서 몰운대입구간 테마거리 조성을 통해 교통 불편 해소 및 다대포 일대의 해양관광 벨트 조성

▣ 사업개요

❍ 위    치 : 다대동 470-3번지 일원(몰운대 진입로)

❍ 사업기간 : 2012. ∼ 2017.

❍ 총사업비 : 75.2억원(시비 75, 구비 0.2)

❍ 사업내용 : 테마거리 조성  L=330m, B=30m

▣ 추진상황

❍ 2012. 11. : 기본설계용역 완료

❍ 2012. 12. : 사업비 20억원 투입(특별교부금)

❍ 2013. 11. : 실시설계용역 완료

❍ 2014. 1. : 사업비 8억원 투입(시비)

❍ 2014. 6. : 지장물 철거 및 토지일부 보상(지장물 33동, 4필지 A=563㎡)

시점부 도로개설(L=68m)

❍ 2014. 4. : 토지보상(1필지 A=699㎡)

❍ 2015. 1. : 사업비 10억원 투입(특별교부금)

❍ 2015. 6. : 토지보상(1필지 A=227㎡), 일부 공사시행(L=330m, B=6~30m)

▣ 기대효과

❍ 낙후된 지역경제 활성화 기여 및 사하구 명소로 관광객 증가

❍ 다대포 서측해수욕장(1사장)과 몰운대를 연계한 관광인프라 구축

□ 사업명 : 다대포해수욕장~몰운대입구테마거리조성

≪ 위 치 도 ≫

≪ 현 장 사 진 ≫

괴정3동 원광연립~동주대학간 도로개설

	《추진배경 혹은 목적》
❍ 낙동대로 우회도로 확보로 교통체증 및 주민생활불편 해소 및 지역균형발전 도모

▣ 사업개요

❍ 위    치 : 괴정3동 260-11번지 일원

❍ 사업기간 : 2010 〜 2016년

❍ 총사업비 : 55억원(시비 30, 구비 25) ▷ 기투자 35, ‘16년이후 20

❍ 사업내용 : 도로개설 L=290m, B=12m

▣ 추진상황

❍ 2010. 7. 5 : 실시설계용역 착수 (‘11.3.18 준공)

❍ 2011. 5. 7 : 1차구간 착공(L=120m, ‘12.2.12 준공)

❍ 2014. 9～2015. 1월 : 2차구간 보상 시행중(건물 6동, 토지 7필지)

※ 건물 5동 토지 6필지 보상완료, 건물 1동 토지 1필지 재결예정

❍ 2015. 4. 15 :  2차구간 공사착공(5.15 공사일시정지)

❍ 2015. 5. 19 : 특별교부세 5억교부

❍ 2015. 5~7월 : 3차구간 보상시행중(건물4동 토지7필지)

▣ 기대효과

❍ 낙동대로 우회도로 확보로 교통체증 및 주민생활불편 해소 및

지역균형발전

□ 사업명 : 괴정3동 원광연립~동주대학간 도로개설

≪ 위 치 도 ≫

≪ 현 장 사 진 ≫

괴정재정비촉진 해제지역 보행자도로 조성

	《추진배경 혹은 목적》
❍ 괴정재정비촉진 해제지역 내 주거지 재생지원사업의 일환으로 노후된 도로로 인한 주민 통행불편 해소 및 도심지 미관 개선 필요 ❍ 보행자도로 조성을 통하여 지역 거주 주민과 주변 지역 통학생들의 보행 안전 확보 및 쾌적한 도시 환경 조성 목적

▣ 사업개요

❍ 위    치 : 사하구 사하로 185번길(괴정동) 일원(괴정소공원 일원)

❍ 사업기간 : 2014. 2월 ~2015. 6월

❍ 총사업비 : 10억원(시비 10)

❍ 사업내용 : 보행자도로 조성 L=700m, B=4~8m

▣ 추진상황

❍ 2104. 01. 22 : 보조금 교부 (시 → 구)

❍ 2104. 02. 21 : 실시설계용역 착수

❍ 2104. 07. 03 : 주민설명회 개최

❍ 2014. 10. 17 : 실시설계용역 완료

❍ 2014. 10. 22 : 공사 계약체결

▷ 주계약자 : 대휘건설(주), 부계약자 : 대명토건(주)

❍ 2014. 10. 28 : 공사 착수

❍ 2015. 06. 09 : 공사 완료

▣ 기대효과

❍ 주민 보행로 개선으로 주민통행 불편 해소

❍ 노후 도로 정비로 도시 미관 개선 효과

❍ 괴정 소공원 조성사업과 연계 추진하여 주거 개선 파급효과 기대

□ 사업명 : 괴정재정비촉제 해제지역 보행자도로 조성

≪ 위 치 도 ≫

≪ 현 장 사 진 ≫

변경 전	변경 후

하단오거리 젊음의 거리 조성사업

	《추진배경 혹은 목적》
❍ 동아대학교 하단캠퍼스와 연계하여 하단오거리 주변에 젊음의 거리를 조성하여 역동적인 도시공간 창출 ❍ 새로운 이미지의 도시 공간 창출로 주민생활환경 개선 및 지역상권 활성화

▣ 사업개요

❍ 위    치 : 하단동 동아대학교~에덴공원 일원

❍ 사업기간 : 2011~2016년

❍ 총사업비 : 50억원(국비 25, 시비 12.5, 구비 12.5)

❍ 사업내용 : 시범가로 조성 L= 2,566m, B=8~15m

▣ 추진상황

❍ 2012.~2013.  : 1,2단계 구간(하단오거리,동아대 입구) 공사준공

❍ 2014. 11. 20 : 3단계(에덴공원 주변) 1차공사 준공

❍ 2015.  4. 16 : 3단계 2차구간 공사착공

▷ 시 건설본부 차집관거 공사와 중복구간 연계시공 등을

위하여 일시정지 중

▻‘15 7월 현재 공정 15%

▣ 기대효과

❍ 문화와 젊음이 함께하는 거리 조성으로 지역 상권 활성화 기대

❍ 도시기초시설물 재정비를 통한 도시이미지 제고 및 지역 명소화

□ 사업명 : 하단오거리 주변 젊음의 거리 조성

≪ 위 치 도 ≫

≪ 현 장 사 진 ≫

회화나무 공영주차장 조성

	《추진배경 혹은 목적》
❍ 괴정재정비 촉진해제 지역 내 주택가 주차난 해소

▣ 사업개요

❍ 위    치 : 괴정1동 514-4번지 일원

❍ 사업기간 : 2014. 3 ~ 2015. 3

❍ 총사업비 : 25억원(시비 10, 구비 15)

❍ 사업내용 :  주차면 62면 조성, 2층3단 철골조

▣ 추진상황

❍ 2014. 3. 공사 착공

❍ 2015. 3. 공사 준공

❍ 2015. 4. 공영주차장 운영개시

▣ 기대효과

❍ 주차난이 심각한 주택가의 노후 주택을 매입하여 주차장을 조성       함으로써 주택가 주차난 해소

□ 사업명 : 회화나무 공영주차장 건설

≪ 위 치 도 ≫

≪ 현 장 사 진 ≫

감천문화마을 주차장 조성

	《추진배경 혹은 목적》
❍ 감천문화마을 주택가 주차난 해소

▣ 사업개요

❍ 위    치 : 감천2동 11-103번지 일원

❍ 사업기간 : 2014. 7 ~ 2014. 11

❍ 총사업비 : 3.1억원(시비)

❍ 사업내용 : 주차면 10면 조성

▣ 추진상황

❍ 2013. 11. ~ 2014. 6. 실시설계 용역

❍ 2014. 7.  공사착공

❍ 2014. 12. 공사완공

❍ 2014. 12. 주거지 전용주차장 운영개시

▣ 기대효과

❍ 고지대 영세주택 밀집지역의 심각한 주차난 해소

□ 사업명 : 감천문화마을 주차장 건설

≪ 위 치 도 ≫

≪ 현 장 사 진 ≫