9

주요 투자사업 추진현황

9-1. 투자심사 대상사업

우리 사하구에서 ‘15년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2014년까지 집행사업비	2015년 소요사업비	2016년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
장림포구 명소화 사업	6,500	2,115	2,684	1,701	2016	2012	80%
감천문화마을 분류식 하수관거 신설	7,733	500	1,500	5,733	2018	2013	30%
다대동 창조커뮤니티존 조성	3,900	-	171	3,729	2018	2014	20%
새뜰마을사업	6,661	-	283.7	6,377.3	2018	2015	30%
서부산권 장애인스포츠센터 건립	11,400	-	4,000	7,400	2017	2014	45%
구청사 증축	2,895	129	2,766	-	2015	2013	100%
장림·다대 노인복지관 건립	4,600	-	1,300	3,300	2017	2015	20%
괴정재정비촉진 해제지역 공영주차장 건설	2,501	2,501			2015	2013	100%
다대4지구 노상공영주차장 건설	1,000	-	19	981	2016	2015	80%
장림동 노외공영주차장 건설	2,000	-	-	2,000	2017	2015	15%
감천문화마을 공영주차장 확충	2,750	-	-	2,750	2016	2015	50%
괴정3동 원광연립~동주대학간 도로개설	5,950	2,500	2,000	1,450	2017	2010	70%
괴정3동 삼경맨션~1238-299번지간 도로개설	2,500	1,700	500	300	2016	2011	90%
하단오거리 주변 젊음의 거리 조성사업	5,000	4,358	642	-	2016	2011	98%
장림 금창수산~CJ부산공장간 도로개설	4,500	4,500	-	-	2015	2013	100%
감천2동 감정초교일원 천마산 산복도로 개설	6,800	1,000	-	5,800	2018	2014	30%
천마산 산복도로~감천사거리간 도로개설	3,500	1,350	500	1,650	2017	2012	53%
대광고~하단성당간 도로개설	8,700	1,000	1,100	6,600	2017	2010	17%
sunset 수변·휴게공간 조성	1,689	189	280	1,220	2016	2012	95%
다대포해수욕장~몰운대간 도로개설	7,120	2,820	1,000	3,300	2016	2012	100%

‣ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2015년에 추진한 사업

9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황 : [별지 4] 투자심사사업 추진현황

9-2. 지방채 발행사업 : 해당사항 없음

9-3. 민간투자사업

우리 사하구에서 ‘15년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				’14년까지 부담액	’15년 부담액	’16년 이후 부담 예정액
BTL	다대도서관 건립	화명다대도서관(주)	20,001	4,615	925	14,461	20년 (2010~2030)

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2015년까지는 집행액(결산기준), 2016년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

9-3-1. 개별 민간투자사업 현황

사업명

다대도서관 건립

담당자

다대도서관 장윤숙(☎220-5862)

□ 사업목적 및 필요성

○ 문화시설 확충으로 평생학습교육 증진과 문화적 활동 공간 제공

□ 사업개요

○ 공사기간 : 2009.1.1~2010.1.31 (운영기간: 2010년~2030년)

○ 위    치 : 부산광역시 사하구 다대낙조2길 9

○ 민간사업자 : 화명다대도서관(주)

○ 총사업비 : 20,001백만원

○ 사업규모 : 부지 1,657㎡, 연면적 3,521㎡(지하1층, 지상5층)

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

- 건립(관리)비용 20년 균등 상환(2010년~2030년)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	20,001	4,616	946	969	13,470
국 비	2,779	746	145	152	1,736
시 도 비	3,242	886	169	177	2,010
시군구비	13,980	2,984	632	640	9,724
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진단계

○ 운영중

□ 향후계획

○ 이용인원 확대 : 450,000명 목표(일일 1,400명) ▷ 작년대비 10,000명 증가(예상)    ○ 장서수 확대 : 91,841권 목표 ▷ 작년대비 8,000권 증가(예상)

○ 책 읽는 사하 만들기 운동 전개

- 독서환경 개선 : 도서 통합대출·반납서비스 운영, 도서택배 무료서비스 운영,                        장애인 정보누리터 설치, 비도서자료(DVD) 대출 운영

- 독서진흥사업 추진 : 도서관 주간행사, 독서의 달 행사

- 문화강좌 활성화 : 독서문화, 외국어, 정보화, 방학특강 등