괴정골목시장 소규모 환경개선사업

	《추진배경 혹은 목적》
❍ 노점상 및 점포 경계선 정비를 통한 소방도로 확보로 인적‧물적 피해를 최소화하고 깨끗하고 쾌적한 쇼핑공간 제공으로 인한 소득증대 기여 및 지역경제 활성화 도모

▣ 사업개요

❍ 위    치 : 괴정동 964-7번지, 괴정골목시장 내

❍ 사업기간 : 2014. 12월 ~ 2016. 5월

❍ 총사업비 : 1.13억원(시비 0.13, 시재배정 1)

❍ 사업내용 : 노점상 매대 70대 제작, 질서유지선 도색(황색 706m, 흰색 496m)

▣ 추진상황

❍ 2014. 12. 17. : 환경정비사업 추진계획 설명회 개최

❍ 2015. 1~4월 : 사업추진 실무협의 (20여회)

❍ 2015. 04. 30. : 환경정비사업에 따른 협약 체결 (사하구청, 상인회, 연합상우회)

❍ 2015. 05. 29. : 질서유지선 도색공사 착공(사업기간 : 5. 29. ~ 6. 23.)

❍ 2015. 06. 17. : 상인간 이해관계 발생으로 질서유지선 도색공사 중지

❍ 2015. 7월 ~ 2016. 2월 : 사업추진에 따른 상인들 설득

❍ 2016. 01. 02. : 매대 제작 완료

❍ 2016. 03. 11. : 환경정비사업 공청회 개최

❍ 2016. 04. 01. : 괴정골목시장 노점매대 표준화사업 완료

❍ 2016. 05. 08. : 괴정골목시장 노점상 및 점포경계선 도색공사 완료

▣ 기대효과

❍ 노점상 및 점포 질서유지선 정비를 통한 유사시 안정적인 소방도로 확보

❍ 뉴코아 아울렛 쪽 시장입구 가각부분 생선 노점상 정비로 도로환경 개선

❍ 깨끗하고 쾌적한 장보기 환경제공으로 전통시장 상권 활성화 도모

□ 사업명 : 괴정골목시장 소규모 환경개선사업

≪ 위 치 도 ≫

≪ 현 장 사 진 ≫ 괴정골목시장 전경

□ 사업명 : 괴정골목시장 노점매대 표준화사업

≪ 현 장 사 진 ≫ 정비전

≪ 현 장 사 진 ≫ 정비후

□ 사업명 : 괴정골목시장 노점매대 표준화사업

≪ 현 장 사 진 ≫ 정비전

≪ 현 장 사 진 ≫ 정비후

□ 사업명 : 괴정골목시장 노점상 및 점포경계선 도색공사

≪ 현 장 사 진 ≫ 공사전

≪ 현 장 사 진 ≫ 공사후