다대1동 467번지 일원 도로개설

	《추진배경 혹은 목적》
❍ 다대포 해수욕장 내 「꿈의 낙조분수」설치・운영에 따른 해수욕장 이용 시민증가로 차량 정체 심화 등의 문제 발생 ❍ 도로개설을 요구하는 민원이 지속적으로 발생하고 있어 본 도로의 조기개설 필요

▣ 사업개요

❍ 위    치 : 사하구 다대동 466-2번지 ~ 470-1번지 일원

❍ 사업기간 : 2009년 ~ 2018년

❍ 총사업비 : 37억원(시비 15, 구비 12, 기타 10)

❍ 사업내용 : 도로개설 L=222m, B=8m

▣ 추진상황

❍ 2009.  7. : 특별교부금(5억원) 확보

❍ 2009. 11. : 실시설계용역 완료

❍ 2011. 1. ~ 7. : 시비보조금(4억원) 및 구비(6억원) 확보

❍ 2012.  3. : 보상(A=891㎡) 및 건물 철거(1동) 완료

❍ 2016.  7. : 보상(A=254㎡) 완료

❍ 2017.  6. : 구비(4억원) 확보

❍ 2017.  7. : 보상(A=265㎡) 추진 중

▣ 기대효과

❍ 다대포 해수욕장 이용객 및 주민들에게 편의 제공하고, 장기미집행

도시계획시설(도로)을 개설하여 민원불편 해소

□ 사업명 : 다대1동 467번지 일원 도로개설

≪ 위 치 도 ≫

≪ 현 장 사 진 ≫