홍티예술촌 건립

	《추진배경 혹은 목적》
❍ 예술인의 창작활동 지원을 위한 레지던시 창작공간 조성 ❍ 지역자산을 활용한 마을재생 및 지역문화예술 네트워크 구축

▣ 사업개요

❍ 위    치 : 홍티로 76 일원 ▷ 2017. 11. 14. 개관

❍ 사업기간 : 2015. 5. ~ 2017. 11.

❍ 총사업비 : 4,334백만원

❍ 사업내용 : 창작공간 조성, 마을 주거환경개선사업 등

▣ 추진상황

❍ 2015. 5. 7. : 홍티예술촌 조성 기본계획 수립

❍ 2015. 7.27. : 지역주민과의 대화 개최

❍ 2015. 9.22. : 주민 및 예술가(지역작가) 설명회 개최

❍ 2015.10.27. : 경관위원회 심의

❍ 2015.11.30. : 실시설계(건축분야) 용역 완료

❍ 2016. 6.30. : 홍티예술촌 조성공사(토목분야) 준공

❍ 2016. 8.17. : 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면 고시

❍ 2016. 8.22. : 공용건축물 협의 승인

❍ 2016.12. 7. : 지역작가와의 간담회(‘찾아가는 문화진담’) 개최

❍ 2017. 6.22. : 홍티예술촌 조성공사(건축분야) 준공

❍ 2017. 6.30. : 홍티예술촌 운영 조례 제정

❍ 2017. 7.27. : 홍티마을회관 개소

❍ 2017. 9.20. : 홍티예술촌 조성공사(조경분야) 준공

❍ 2017.11.14. : 홍티예술촌 개관

▣ 기대효과

❍ 무지개공단과 전통적인 어촌포구인 홍티마을이 혼재한 독특한 지역적 특성을 지닌 공간에 위치한 홍티예술촌은 예술 작가들의 창의적인 창작활동을 지원하고 홍티포구 주민의 삶터인 홍티마을의 정주환경을 개선

❍ 130평 규모의 대규모 공동작업실과 입주작가 8명이 작업할 수 있는 개인작업실 8실을 갖추어 창의적이고 실험적인 창작활동을 지원함으로써 서부산 지역의 새로운 문화거점 공간으로 활용

□ 사업명 : 홍티예술촌 건립

≪ 위 치 도 ≫

홍티예술촌

≪ 현 장 사 진 ≫