장림․다대지역 노인복지관 건립

	《추진배경 혹은 목적》
❍ 사하(신평)사랑채노인복지관의 괴정동 지역편중 및 이용자 포화상태로 인한 장림ㆍ다대지역 거주 노인의 이용인원 분산 필요 ❍ 장림ㆍ다대지역의 60세 이상 노인인구 증가에 따른 노인복지 수요증가

▣ 사업개요

❍ 위    치 : 부산시 사하구 다대로300번길 9(장림동 385번지)

❍ 사업기간 : 2014. 9월 ~ 2018. 5월

❍ 총사업비 : 56억원(시비 22, 구비 34)

❍ 사업내용 : 부지 378㎡, 건물 연면적 1,621.43㎡ (지하1층/지상8층)

▣ 추진상황

❍ 2015.  7월 : 건립부지 매입

❍ 2016. 9월~10월 : 실시설계용역 완료, 건립공사 착공

❍ 2017. 6월 : 지하층 기초공사 준공

❍ 2018. 1월 : 지상8층 골조공사 완료

❍ 2018. 5월 : 건립공사 준공

▣ 기대효과

❍ 지역적으로 편중되고 이용인구가 포화상태인 기존 노인복지관의 이용인원의 효율적 분산

❍ 노인인구 증가에 따른 노인복지수요에 능동적으로 대처함으로써 노후생활지원 및 지역노인 삶의 질 향상

□ 사업명 : 장림다대 노인복지관 건립

≪ 위 치 도 ≫

≪ 현 장 사 진 ≫