장림골목시장 아케이드 설치 및 공영주차장 건립

기재

	《추진배경 혹은 목적》
❍ 노후된 환경을 개선하여 전통시장 경쟁력 강화 및 지역경제 활성화 ❍ 장림골목시장 주변의 고질적인 불법 주차를 근절하고 상인 및 시장 이용 고객들의 주차난 해소를 위해 인근의 기존 공영주차장(55면)을 확장하여 조성

▣ 장림골목시장 아케이드 설치(1차)

❍ 위    치 : 장림시장5길 95, 장림골목시장 일원

❍ 사업기간 : 2016.1월 ~ 2017.11월

❍ 총사업비 : 15억원(국비 9, 시비 3.75, 구비 0.75, 상인회 1.5)

❍ 사업내용 : 1차 아케이드 설치(2017년, 154m)

❍ 추진상황

- 2016. 1월 : 시설현대화사업 추진계획 수립

- 2016. 10월 : 실시설계용역 완료

- 2017. 11. 17. : 아케이드 설치(1차) 준공

❍ 기대효과 : 시장환경 개선 및 소득 증대 기여

❍ 향후계획 : 1차 아케이드 설치 구간(2017년, 154m)에 이어 나머지 2차                 아케이드 구간(136m)을 설치하여 시장 환경개선 및 소득 증대 기여

▣ 장림골목시장 공영주차장 건립

❍ 위    치 : 장림동 328-4번지

❍ 사업기간 : 2017. 1월 ~ 2018. 12월

❍ 총사업비 : 44억원(국비 18, 시비 9, 구비 17)

❍ 사업내용 : 철골 조립식 주차장 건립 ▶ 3층4단, 주차면수 156면

❍ 추진상황

- 2017. 01. 18. : 2017년 전통시장 주차환경개선사업 신청 ▷ 중소기업청

- 2017. 02. 13. : 현장평가 실시(부산중기청 1, 부산시 3, 외부전문가 2)

- 2017. 03. 16. : 2017년 주차환경개선사업 선정

- 2017. 04. 19. : 실시설계용역 부산시 계약심사

- 2017. 04. 27. : 사전규격 공개의뢰

- 2017. 05. 16. : 실시설계용역 계약 의뢰

- 2017. 06. 15. : 실시설계용역 착수

- 2017. 06. 27. : 주차환경개선사업 국고보조금 신청

- 2017. 07. 20. : 용역 착수보고회 개최(안전도시국장, 건설과장 외 5명)

- 2017. 07. 27. : 관계자 회의 개최(상인회, 경제진흥과, 건설과, 설계업체)

- 2017. 09. 26. : 건설기술자문위원회 개최(공무원3, 외부전문가3, 명예감사관1)

- 2017. 11. 09. : 설계용역 일시중지

- 2017. 11. 15. : 주민설명회(1차) 개최(상인회, 인근 주민)

- 2017. 11. 27. : 주민설명회(2차) 개최(인근 주민)

- 2018. 01. 05. : 부산시 계약심사 의뢰

- 2018. 01. 12. : 부산시 계약심사 완료

- 2018. 02. 19. : 실시설계용역 완료

- 2018. 02. 21. :사전규격 공개 의뢰

- 2018. 03. 06. : 공사 및 용역 계약 의뢰

- 2018. 03. 27. : 공사 착공

- 2018. 05. 14. : 주민설명회(3차) 개최(인근 주민)

- 2018. 05. 21. : 공사 중지(인근 주민 공사 반대)

- 2018. 12월   : 공사 준공예정

❍ 기대효과 : 전통시장 이용시 고객이 가장 불편함을 느끼는 주차문제를                  해소하여 경쟁력 강화 및 전통시장 활성화에 기여

□ 사업명 : 장림골목시장 아케이드 설치

≪ 위 치 도 ≫

≪ 현 장 사 진 ≫

□ 사업명 : 장림골목시장 공영주차장 건립

≪ 위 치 도 ≫

≪ 현 장 사 진 ≫