하단1동 노외공영주차장 설치공사

	《추진배경 및 목적》
❍ 하단5일 상설시장 주변 및 주택가·상가 밀집 지역의 이면도로 불법 주·정차 근절 및 지역 주민들의 주차편의를 도모하고 재래시장 이용객 주차 편의 제공으로 재래시장 활성화에 기여

▣ 사업개요

❍ 위    치 : 사하구 하단동 54번지 일원

❍ 사업기간 : ‘18.5.18 ~ ’18.11.17

❍ 총사업비 : 39.5억원(시비 17.5, 구비 22)

❍ 사업내용 : 주차장 조성 A=901㎡, 2층3단 61면

▣ 추진상황

❍ 2016.  4월 : 공영주차장 조성계획 수립

❍ 2016.  6월 : 사업비(구비 2,200백만원) 확보(1회 추경)

❍ 2016.  8월 : 실시설계용역 착수

❍ 2016. 10월 : 주민설명회 개최, 주민열람공고, 관계부서 의견협의

❍ 2016. 11월 : 도시계획위원회 심의 및 도시관리계획 결정 고시

❍ 2017.  1월 : 사업비(시비 1,000백만원) 확보

❍ 2017. 10월 : 지장물 5동 중 2동 보상 및 철거완료

❍ 2018.  3월 : 공사 계약 심사 완료 및 중토위 재결통보

❍ 2018.  5월 : 공사 착공

▣ 기대효과

❍ 하단5일 상설시장 이용객 주차편의 제공 및 인근 주택밀집지역

주민들의 주차난 해소

□ 사업명 : 하단1동 노외공영주차장 설치공사

≪ 위 치 도 ≫

≪ 현 장 사 진 ≫