109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 구에서 ‘19년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2019년 집행사업비	2020년	2021년 이후
장림항 보행교 설치	5,300	300	-	-	5,000	2022	2018	5.7%
괴정2동 대티고개 새뜰마을사업	3,236	1,023	1,173	1,040	-	2021년	2017년	67%
감천2동 감정초교일원 천마산 산복도로 개설	5,800	2,667	1,200	1,933	-	2021년	2017년	25%
신평행정복지타운 건립	33,500	5,400	18,600	9,500	-	2020	2018	100%
공단진출입 우회도로 확장	2,400	1,400	-	700	300	2021	2019	70%
실버힐링센터 조성	2,950	2,124	826	-		2019		100%
장림동 문화복지복합센터 건립	2,278		862	1,298	118	2021	2019	20%
당리동 샛별지하 공영주차장 건설	2,500	-	20.6	87.4	2,392	2021	2018	25%
괴정3동 노외공영주차장 건설	2,800	-	43.4	2,590	166.6	2021	2018	20%

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여

2019년에 추진한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황 : [별지7]

10-2. 지방채 발행사업

우리 구에서 ‘19년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
사하구 제2청사 건립	33,500	8,000		2,100	22,400	1,000	8,000	100

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2019년에 추진한 사업

10-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명

사하구 제2청사 건립

담당자

재무과 전대일(☎220-4152)

□ 사업목적 및 필요성

○ 보건․복지․행정 서비스 원스톱 제공으로 주민들의 이용 편의성 증대

○ 신평 산업단지 주변 침체된 지역경제 활성화의 거점 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2020년

○ 위 치 : 하신중앙로 185(신평동)

○ 규 모 : 부지 3,306㎡, 건물연면적 10,734㎡(지하2층, 지상6층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 33,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	33,500
지 방 채	8,000	0	8,000
국 비	0	0
시 도 비	2,100	0	2,100
시군구비	22,400	10,000	11,112	1,288
기 타	1,000	1,000

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 99%)

○ ‘18. 1월 : 공사착공

○ ’19. 3월 : 도입시설 재배치 확정

○ ‘19. 8월 : 신평행정복지타운 운영계획(안) 수립

□ 향후계획

○ ’20. 1월 : 공사 준공

○ ’20. 3월 : 입주

10-3. 민간투자사업

우리 구에서 ‘19년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2018년	2019년	2020년 이후
BTL	다대도서관 건립	화명다대 도서관(주)	20,001	8,268	931	932	9,870	20년 (2010~ 2030)

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2019년까지는 집행액(결산기준), 2020년 이후는 추정액

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황

개별 민간투자사업 현황

사업명

다대도서관 건립

담당자

다대도서관 박소연(☎220-5862)

□ 사업목적 및 필요성

○ 문화시설 확충으로 평생학습교육 증진과 문화적 활동 공간 제공

□ 사업개요

○ 공사기간 : 2009.1.1~2010.1.31 (운영기간: 2010년~2030년)

○ 위    치 : 부산광역시 사하구 다대낙조2길 9

○ 민간사업자 : 화명다대도서관(주)

○ 총사업비 : 20,001백만원

○ 사업규모 : 부지 1,657㎡, 연면적 3,521㎡(지하1층, 지상5층)

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

- 건립(관리)비용 20년 균등 상환(2010년~2030년)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	20,001	8,268	931	932	9,870
국 비	1,437	1,298	139
시 도 비	4,584	1,528	162	301	2,593
시군구비	13,980	5,444	630	631	7,277
기 타

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 택 1)

○ 운영 중

□ 향후계획

○ 이용인원 확대 : 560,000명 목표 ▷ 작년대비 1,000명 증가(예상)

○ 장서수 확대 : 132,000권 목표 ▷ 작년대비 4,000권 증가(예상)

○ 책 읽는 사하 만들기 운동 전개

- 독서환경 개선 : 도서 통합대출·반납서비스 운영, 도서택배 무료서비스 운영,                         비도서자료(DVD) 대출 운영

- 독서진흥사업 추진 : 도서관 주간행사, 독서의 달 행사 개최 등

- 문화강좌 활성화 : 독서문화, 외국어, 정보화, 방학특강 등

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음