장림골목시장 공영주차장 건립

	《추진배경 혹은 목적》
❍ 전통시장인 장림 골목시장 주변의 고질적인 불법주차를 근절하고 상인 및 시장이용 고객들의 주차난 해소를 위해 인근의 기존 공용주차장을 2017년 전통시장 주차환경개선사업으로 확장, 조성하고자 함.

▣ 사업개요

❍ 위    치 : 장림1동 328-4번지

❍ 사업기간 : 2017년 1월 ~ 2019년 8월

❍ 총사업비 : 30억원(국비 18, 시비 9, 구비 3)

※토지별도(구유지 활용, 14억원)

❍ 사업규모 : A=1,595㎡, 3층4단 주차면 144면 조성

▣ 추진상황

❍ 2018년 2월 : 공사 발주계획 및 설계용역

❍ 2018년 3월 : 공사 착공 및 용역 착수

❍ 2018년 5월 : 주민설명회 및 공사 정지(화천아파트 주민 주차장 건립 반대)

❍ 2018년 11월 : 공사 재개

❍ 2019년  8월 : 공사 준공

▣ 기대효과

❍ 전통시장 주차환경개선으로 대형마트, 대규모 점포와의 경쟁력 강화

❍ 전통시장 매출증가로 상인들의 소득증대 및 지역경제 활성화

□ 사업명 : 장림골목시장 공영주차장 건립

≪ 위 치 도 ≫

≪ 현 장 사 진 ≫