부네치아 선셋 전망대(해양수산복합공간) 조성

	《추진배경 혹은 목적》
장림포구 명소화사업과 연계한 지역 특산물의 홍보·전시·판매시설 건립으로 어업인 소득증대에 기여하고 지역경제 활성화를 도모

▣ 사업개요

❍ 위    치 : 사하구 장림로93번길 74(장림동)

❍ 사업기간 : 2016. 8월 ~ 2019. 12월

❍ 총사업비 : 19억원(국비 5, 시비 2.5, 구비 11.5)

❍ 사업내용 : 해양수산복합공간 건립 1식(지상2층, 연면적 389.21㎡)

► 1층 판매장, 2층 홍보․전시․판매 복합공간, 옥상 전망대

▣ 추진상황

❍ 2016.  8월 ~ 2017.  4월 : 건축 및 실시설계용역 실시

❍ 2017.  7월 : 건축공사 착공

❍ 2017. 10월 : 건축공사 주계약자 변경계약 체결

❍ 2018.  2월 : 공사 중 공업용수관 파손

❍ 2018.  2월 ~ 10월 : 용수관 복구공사, 재설계 용역 및 변경계약 체결

❍ 2018. 10월 : 시공사 변경 및 건축공사 착공

❍ 2019.  8월 : 건축공사·전기공사·통신공사 등 준공

❍ 2019. 11월 : 홍보관 전시물 제작·설치

❍ 2019. 11월 : 부네치아 선셋 전망대 개장

❍ 2019. 12월 : 복합공간 시설 보강공사

▣ 기대효과

❍ 지역 특산물 판매, 홍보기능을 가진 수산물유통시설 건립을 통해 산지 유통시설 강화, 어업인 소득증대 및 지역경제 활성화에 기여

□ 사업명 : 부네치아 선셋 전망대 (해양수산복합공간) 조성

≪ 위 치 도 ≫

≪ 현 장 사 진 ≫