개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

장림항 보행교 설치

담당자

경제진흥과

신원준(☎220-4502)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장림항의 랜트마크 시설로서 보행교를 설치하여 관광객 및 지역주민의 보행환경 개선 및 특색있는 관광자원화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2022년

○ 위 치 : 사하구 장림동 1092번지 일원(장림항 내)

○ 규 모 : 보행교 1식(L=89m, B=4m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  5,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,300	300			5,000
국 비	2,500				2,500
시 도 비	1,250				1,250
시군구비	1,550	300			1,250
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5.7 %)

○ 2018. 5. ~ 8. : 장림항 보행교 조성사업 설계 공모

○ 2018. 9. ~ 2020. 7. : 장림항 보행교 실시설계 용역 추진

※ 2018. 11월 용역 중지(어촌뉴딜 300사업 선정 결과 후 사업 추진 방향 검토)

□ 향후계획

○ 2020. 12. : 장림항 보행교 실시설계 용역 완료

○ 2021. ~ 2022. : 장림항 보행교 조성사업 착공․준공

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

괴정2동 대티고개 새뜰마을사업

담당자

도시재생과 조현복(☎220-5916)

□ 사업목적 및 필요성

○ 반복되는 시약산의 토사유출과 침수, 옹벽 붕괴로 쇠락해 가는 대티고개 마을의 안전 확보, 주거기반시설 확충 및 생활환경 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2020년

○ 위 치 : 괴정2동 대티고개마을(1,2,3통 일원, A=46,359㎡)

○ 규 모 : 안전·생활·위생인프라 개선, 주택정비 지원, 주민역량강화

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,236백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,236	1,023	1,173	1,040	-
국 비	2,265	500	876	889	-
시 도 비	291	66	203	22	-
시군구비	680	457	94	129	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 67%)

○ ‘18. 5월 : 고개마루 사랑방 준공

○ ‘19. 9월 : 고개마을 도시재생대학 운영

○ ‘19.12월 : 공유마당조성(4차) 준공

○ ‘20. 2월 : 산비탈 정비사업(2차) 준공

□ 향후계획

○ ‘20. 8월 : CPTED 지킴골목 정비사업 계약 및 착수

○ ‘20. 9월 : 뚝딱뚝딱 집수리사업 완료

□ 사업변경 내역

○ 2020년 2월 사업계획 변경함

단위사업	세부사업	사업비 (당초)	사업비 (변경)	증감
합 계		3,236	3,236	0
안전확보	소 계	465	645	180
	- 산비탈 버팀목 정비사업	140	320	180
	-CPTED 지킴골목 정비	325	325	0
생활환경인프라	소 계	1,336	1156.32	-180
	- 마을 너른숨길틔우기	412	412	0
	- 고개마을 생활뿌리 정비	450	270	-180
	- 고개마루 사랑방 정비	474.32	474.32	0
주택정비	소 계	902.43	1002.43	100
	- 고개마을 공유마당 조성	580.43	580.43	0
	- 뚝딱뚝딱 집수리사업	322	322	0
	- 고개마을 빈집정비		100	100
휴먼케어 및 주민역량강화	소 계	250	150	-100
	- 대티고개마을 힐링프로그램	100	60	-40
	- 대티고개 마을대학	150	90	-60
마스터플랜 수립	소 계	282.25	282.25	0
	- 마스터플랜 및 실시설계	282.25	282.25	0

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

감천2동 감정초교일원 천마산 산복도로 개설

담당자

도시재생과 조현복(☎220-5916)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고지대 저소득 주민 밀집지역 교통 불편 해소, 화재취약 지역의 소방도로 확보, 재해·재난으로부터 피해 최소화

○ 천마산 뉴딜 사업과 연계하여 지역 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2020년

○ 위 치 : 감천동 산99-1 ~ 10-149번지 일원

○ 규 모 : 소방도로 개설 L=332m, B=10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,800	2,667	1,200	1,933	-
국 비	773	773		-	-
시 도 비	1,527	1,447		80	-
시군구비	3,500	447	1,200	1,853	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ ‘13.10월 : 도시활력증진지역 개발사업「지성이면 감천문화마을조성」선정

○ ‘17. 5월 : 도시활력증진지역 개발사업 계획변경 승인(소방도로 위치 변경)

○ ‘18.10월 : 소방도로 개설 구조검토 용역 준공

○ ‘19. 4월 : 1차 공사 착공 ▹ ’19.08월 보상지연으로 인해 공사 중지

□ 향후계획

○ ‘20.  9월 : 2차 공사 착공 ▹ ’21년 하반기 공사 준공 예정

□ 사업변경 내역

구 분	위 치	규 모	사업비(백만원)	비고
당초	감천동 산91~5번지~ 6-1236번지 일원 ▸ 감천문화마을 내	L=340m B=4~6m	3,987 (국933 시1,527 구1,572)	사업비 증가 1,813 구비 부담
변경	감천동 산99-1번지~10-149번지 일원 ▸ 감정초교 일원	L=332m B=10m	5,800 (국933 시1,527 구3,340)

○ 감천문화마을 보존형 지구단위 계획에 따라 소방도로 위치 변경

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

신평행정복지타운 건립

담당자

재무과 정경민(☎220-4152)

□ 사업목적 및 필요성

○ 보건․복지․문화․행정 서비스 원스톱 제공으로 주민들의 이용 편의성 증대        및 신평․장림 산업단지 주변 침체된 지역의 경제활성화와 지역공동체 거점        지역으로서의 시너지 효과 극대화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015년 ~ 2020년

○ 위 치 : 신평동 646-2, -3번지

○ 규 모 : 지하2층 ~ 지상6층, 연면적 10,683㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 33,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	33,500	5,400	18,600	9,500	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,100	-	2,100	-	-
시군구비	22,400	5,400	11,451	5,549	-
지 방 채	8,000	-	4,049	3,951	-
민간자본	-	-		-	-
기타(특별교부금)	1,000	-	1,000	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2017. 9. : 건축공사 발주

○ 2018. 1. : 공사 착공

○ 2019. 4. : 도입시설 재배치 (복지4개부서 입주)

○ 2019. 7. : 교통영향평가 심의

○ 2020. 1. : 공사 준공

○ 2020. 2. : 입주부서 이전

□ 향후계획

○ 시설관리 및 하자보수 등

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

공단 진출입 우회도로 확장

담당자

건설과 최용우(☎220-4694)

□ 사업목적 및 필요성

○ 인근 주택건설사업 시행 등 향후 교통량 증가가 예상되는 동매로 일원의 도로확장을 통한 안전한 도로환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2021년

○ 위 치 : 하단동 372-1번지 일원

○ 규 모 : 도로확장 L=200m, B=6~8m→15m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,400	1,400		700	300
국 비
시 도 비	700			700
시군구비	1,700	1,400			300
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2019. 6. : 1차(L=60m) 구간 확장공사 준공

□ 향후계획

○ 2020. 3. : 2차(L=80m) 구간 확장공사 준공

○ 2020. 6. : 3차(L=60m) 구간 손실보상 협의

○ 2020. 8. ~ : 3차(L=60m) 구간 예산 확보 노력

□ 사업변경 내역

○ 3차구간 감정평가 결과 보상비 과다로 인한 사업비 부족으로 추가 예산(300백만원) 확보 필요

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

실버힐링센터 조성

담당자

건강증진과 김주현(220-5987)

□ 사업목적 및 필요성

○치매국가책임제에 따라 노인, 치매환자 및 가족을 체계적으로 지원할 수 있는 인프라 구축

○치매안심센터, 작은(실버) 도서관 등 노인을 위한 복합문화공간 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017.10월 ~ 2019.4월

○ 위 치 : 사하구 까치고개로 50-10(괴정2동)

○ 규 모 : 부지 1,532㎡(463평), 연면적 997.87㎡(302평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,950백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,950	2,124	826
국 비	720	720
시 도 비	890	890
시군구비	559	93	466
지 방 채
특 교 금	180		180
특 교 세	600	421	179

□ 추진상황(완료)

○ 2018. 01. : 부동산 매매계약 체결 및 소유권 이전등기

○ 2018. 07.  : 설계용역 완료

○ 2018. 09.  : 공사발주 의뢰

○ 2018. 11.  : 리모델링 공사 착공

○ 2019. 03.  : 리모델링 공사 완공

○ 2019. 05.  : 실버힐링센터 개관

□ 향후계획

○ 연간 20,000여명 이상의 사하구 노인에게 치매 통합관리서비스 제공

○ 실버도서관, 동아리실 운영으로 노인 여가 환경 조성

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

장림동 문화복지복합센터 건립

담당자

평생교육과 이영주(☎220-4832)

□ 사업목적 및 필요성

○ 문화 및 공보육 기반시설이 부족한 장림동 내 생활밀착형 SOC 복합

시설을 조성하여 지역주민 삶의 질을 향상시키고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 3. ~ 2021. 5.

○ 위 치 : 부산광역시 사하구 장림동 1137-3번지

○ 규 모 : 지상 1~2층, 건축면적 374.4㎡, 연면적 744.3㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,278백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,278		862	1,298	118
국 비	276		271		5
시 도 비	88.5		86		2.5
시군구비	1,119.5		505	504	110.5
지 방 채
민간자본	794			794
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2019. 4.  : 지방재정투자심사 의결

○ 2019. 5.  : 공유재산관리계획 심의

○ 2019. 11. : 중기지방재정계획 수립

○ 2020. 1.  : 기본 및 실시설계 용역 착수

○ 2020. 6.  : 경관심의

□ 향후계획

○ 2020. 8.  : 실시설계 완료

○ 2020. 9.  : 공사 착공

○ 2021. 5.  : 공사 준공 및 개관

□ 사업변경 내역

○ 사업수행기관(푸르니보육지원재단) 요청에 따른 사업예산(건축비) 일부 증액

- (당초) 2,061백만원 → (변경) 2,278백만원

○ 설계용역 중 시설물 운영 및 관리의 효율성을 위해 사업규모 변경

- (당초) 지상3층, 건축면적 247.5㎡ → (변경) 지상2층, 건축면적 374.4㎡

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

당리동 샛별지하공영주차장 건설

담당자

교통행정과 방소라 (☎220-4512)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2017년 주차장 수급실태 조사용역 결과 주차환경개선 지구(당리동2블록)로  지정된 지역으로 심각한 주차난 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 11월 ～ 2021년 12월

○ 위 치 : 부산광역시 사하구 당리동 348-6번지

○ 규 모 : 주차면 45면, 지하주차장, 부지면적 1,412.9㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,500	-	20.6	87.4	2,392
국 비	1,250	-	-	87.4	1162.6
시 도 비	500	-	-	-	500
시군구비	750	-	20.6	-	729.4
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ ‘18.  1. : 주차환경개선지구로 지정고시 (당리동 2블록)

○ ‘18. 11. : 공유재산심의회 심의

○ ‘18. 12. : 도시계획시설(주차장) 결정 용역 착수

○ ‘19.  5. : 시설결정 관련 주민설명회 개최

○ ‘19.  7. : 도시계획시설 결정 및 지형도면 고시

○ ‘20.  5. : 공공건축심의위원회 심의(원안가결)

○ ‘20.  7. : 실시설계 용역 착수(건축·공원 분야)

□ 향후계획

○ ‘20.  8. : 주민설명회

○ ‘21. 1. ~ 12. : 공사 착·준공

□ 사업변경 내역(해당 시)

○ 사업기간 변경 : 2018년 ~ 2020년 → 2018년~2021년 (사전절차이행 지연)

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

괴정3동 노외공영주차장 건설

담당자

교통행정과 방소라 (☎220-4512)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주택 밀집지역 및 괴정골목시장 이용객들의 주차난 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 11월 ～ 2021년 12월

○ 위 치 : 부산광역시 사하구 괴정동 1238-281번지 일원

○ 규 모 : 주차면 60면, 2층 3단 철골조, 부지면적 1,055㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,800	-	43.4	2,590	166.6
국 비	1,400	-	-	1,400	-
시 도 비	560	-	-	560	-
시군구비	840	-	43.4	630	166.6
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ ‘18. 11. : 공유재산심의회 심의

○ ‘18. 12. : 도시계획시설(주차장) 결정 용역 착수

○ ‘19.  7. : 도시계획시설 결정 및 지형도면 고시

○ ‘19. 11. : 실시설계 용역 착수

○ ‘20.  3. : 실시설계 용역 완료

○ ‘20.  4. : 보상 계획 열람 공고

○ ‘20.  6. : 감정평가 업체 추천

○ ‘20.  8. : 감정평가 완료

□ 향후계획

○ ‘20.  8. : 보상 협의 개시

○ ‘20. 12. ~ ’21. 12. : 공사 착·준공

□ 사업변경 내역(해당 시)

○ 해당 없음