괴정3동 노외공영주차장 조성

	《추진배경 혹은 목적》
❍ 괴정골목시장과 인접한 주택밀집지역의 주차난 해소를 통하여 생활환경 개선 및 구민 만족도 제고

▣ 사업개요

❍ 위    치 : 괴정동 1238-281번지 일원

❍ 사업기간 : 2018. ~ 2021.

❍ 총사업비 : 4,760백만원 (국비 1,930 시비 772 구비 2,058)

❍ 사업내용 : 부지면적=1,046㎡, 2층 3단 철골조, 주차장 60면

▣ 추진상황

❍ 2018. 06. : 공유재산심의위원회 심의· 의결 (원안가결)

❍ 2018. 08. : 지방재정투자심사(자체심사) 심의· 의결 (원안가결)

❍ 2019. 01. : 국가균형발전특별회계 신청 (구 → 시)

❍ 2019. 07. : 도시계획시설결정 용역 완료(지형도면 고시)

❍ 2019. 10. ~ 2020. 03. : 실시설계 용역

❍ 2020. 04. : 보상계획 열람 공고

❍ 2020. 06. ~ 08. : 감정평가 실시

❍ 2020. 08. ~ 10. : 보상협의 (3회-최초, 촉구, 재촉구)

❍ 2020. 11. : 부산지방토지수용위원회 수용재결 신청

❍ 2021. 01. : 수용재결 (2021.1.18.자)

❍ 2021. 03. : 수용개시 (2021.3.15.자) 및 부지 소유권(원시취득) 등기

❍ 2021. 04. : 시유지 매입

❍ 2021. 06. : 중앙토지수용위원회 이의재결 관련 감정평가 및 공사 착공

❍ 2021. 07. : 중앙토지수용위원회 이의재결 (2021.7.22.자)

▣ 기대효과

❍ 주택밀집 지역 및 괴정골목시장 진입로 주변 주차난 해소로 교통체증       개선 및 쾌적한 보행환경 조성

❍ 이면도로 기능 회복으로 위급상황 시 긴급차량 통행 원활 및 소방도로       확보

□ 사업명 : 괴정3동 노외공영주차장 조성

≪ 위 치 도 ≫

괴정골목시장

주택밀집지역

괴정중앙교회 교육관

≪ 현 장 사 진 ≫