감천2동시장 주차장 조성사업

	《추진배경 혹은 목적》
❍ 전통시장 주차환경개선사업으로 대중교통의 접근성이 부족한 감천2동 시장에 주차장을 조성하여 시장 활성화 및 매출 증대에 기여

▣ 사업개요

❍ 위    치 : 감천2동 12-423번지 일원

❍ 사업기간 : 주차장 24면(822㎡, 지평식 주차장)

❍ 총사업비 : 1,700백만원 (국비 840, 시비 420, 구비 440)

❍ 사업내용 : 주차장 24면(822㎡, 지평식 주차장)

▣ 추진상황

□ 2019. 12. : 공사 착공

□ 2020.  1. : 공사 일시정지(사유 : 보상 미완료)

□ 2020.  7. : 공사 재개

□ 2020. 11. : 암판정 위원회 개최

□ 2020. 12. : 공사 일시정지(사유 : 암파쇄 물량반영), 설계변경(1차)

□ 2021.  5. : 설계변경 계약심사

□ 2021.  6. : 공사 재개

▣ 기대효과

❍ 전통시장 주차환경개선사업으로 대중교통의 접근성이 부족한 감천2동 시장에 주차장을 조성하여 시장 활성화 및 매출 증대에 기여

□ 사업명 : 감천2동 시장주차장 조성공사

≪ 위 치 도 ≫

≪ 현 장 사 진 ≫